t.11
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sett.Tecnico e manutentivo

Nr. 444  DEL 22/10/2020	

Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE DEL CAPOLUOGO.  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -  IMPEGNI DI SPESA.	

	L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Ottobre nel proprio Ufficio,  

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

	Visto il provvedimento del Sindaco n. 206 in data 20/05/2019, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'area tecnico-manutentiva con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

	Vista la delibera C.C. n. 7 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2020;

	Vista la delibera G.C. n. 30 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. esercizio 2020, ed assegnato ai responsabili dei servizi il budget di spesa per l'anno corrente;

PREMESSO CHE:
	-con delibera Giunta Comunale n.104 del 26/09/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori “Manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico spogliatoi campo sportivo comunale del Capoluogo” dell'importo complessivo di €.50.000,00 a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Riccardo Ferrari;
	-con determina n.417 del 18/10/2019 è stato affidato l'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 in fase di progettazione ed esecuzione lavori, relativamente ai lavori di che trattasi all' Ing. Pietropaolo Pighini, con studio professionale in Via Domenico Pacchi n.8, Castelnuovo di Garfagnana (LU);
	-con determinazione n.414 del 16/10/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico spogliatoi campo sportivo comunale del Capoluogo” dell'importo onnicomprensivo di €. 50.000,00 dei quali €.39.656,90 per lavori, €.325,00 per oneri sicurezza ed €.10.018,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
	-con Determina del Responsabile n. 421 del 21/10/2019 veniva eseguita Determinazione a contrarre per l’affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico spogliatoi campo sportivo comunale del Capoluogo”, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/16;
 	- con propria determinazione n.429 del 30/10/2019, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Marchi Pietro, con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), Loc. Paradiso n.44, per l'importo di €.38.467,19, oltre €.325,00 per oneri sicurezza ed Iva 10%, a seguito di un ribasso offerto di 3,0%, per un totale di €. 42.671,41 sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- Ravvisata la necessità di redigere una variante in corso d’opera a seguito di riscontro della necessità di eseguire gli allacci degli impianti e dei pannelli solari, la posa in opera di griglie di protezione dei pannelli solari, la tinteggiatura interna delle riprese di intonaco, e sono da computarsi lavori di scavo per posa in opera di serbatoio in plastica dal 1.000 litri, costruzione di manufatto munito di sportello di accesso per riserva acqua con autoclave;

VISTO l’art 106 del D.lgs 50/2016 che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia;
VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori sulla scorta del progetto presentato dal Direttore Lavori, nonchè Responsabile Unico del Procedimento Geom. Riccardo Ferrari,  per un importo netto contrattuale aggiuntivo di €. 3.321.89, oltre Iva, che eleva l’importo complessivo dell’appalto a €. 42.114,08, pari ad un aumento inferiore al 20% del valore iniziale del contratto composta dai seguenti elaborati di perizia:
1) Relazione tecnica,
2) Verbale nuovi prezzi,
3) Atto di sottomissioe e verbale nuovi prezzi,
4) Computo metrico estimativo corpo 
con il seguente quadro economico di variante:
                   
A) Lavori:		
Per lavori 	E.  3.321,89	
TOTALE LAVORI 	E.  3.321,89	
B) Somme a disposizione		
Per Iva  lavori e oneri sicurezza 10%	E.     332,19	
Accantonamento 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016	E.       66,44	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	E.     398,63	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	Euro  3.720,52	

RICHIAMATO l’art. 106 comma 1 lett. C) il quale consente le varianti dei contratti d’appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1)	la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
2)	la modifica non altera la natura generale del contratto;
ACCERTATO pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:
•	non comporta una modifica sostanziale del contratto;
•	è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;
PRESO ATTO CHE: l’entità della perizia di variante comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, come riportato nel seguente quadro di confronto, ed un aumento dell’importo contrattuale netto dell’appalto di €. 3.321,89 inferiore al 20% del valore iniziale;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;
VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa dal RUP e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, senza proroga dei termini contrattuali  e il concordamento di n.3 nuovi prezzi;
PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:
•	Codice Unico di Progetto (CUP); E82J19003420001 il quale deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;
•	il codice CIG identificato per l’aggiudicazione dei lavori : ZA32A6B6A4;
DATO ATTO che è stato ha effettuato le seguenti verifiche sulla Ditta Marchi Pietro, con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), Loc. Paradiso n.44:
-Iscrizione alla Camera del Commercio dalla cui visura camerale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- è stato acquisito il DURC regolare fino alla data del 18/02/2021;
- è stata consultata la Banca dati del casellario informatico dell’AVCP verificando che non sono evidenziate annotazioni ostative all’approvazione dell’aumento contrattuale oggetto della presente variante;
DATO ATTO CHE:
- l’approvazione della presente perizia suppletiva e di variante comporta un aumento dell’ importo contrattuale rideterminato a favore della Ditta Marchi Pietro, con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), Loc. Paradiso n.44, di €. 3.321,89 oltre IVA e che pertanto l’importo complessivo di €.3.654,08 (iva inclusa) sarà coperto in parte con il ribasso d'asta delle gare già effetuate e in parte dalle somme a disposizione;
RICHIAMATI:
-l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
-il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165);
VISTI:
•	gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
•	il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sun Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
•	il Regolamento per la Disciplina dei Contratti Pubblici;
RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. DI APPROVARE, la perizia di variante al progetto "Lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico spogliatoi campo sportivo comunale del Capoluogo” composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell’ufficio, dell’importo complessivo di progetto di €.50.000,00, dando atto che l’importo contrattuale netto dei lavori che verranno affidati alla Ditta Marchi Pietro, con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), Loc. Paradiso n.44, passa da €.38.792,19 ad €. 42.114,08 (iva esclusa).

2. DI AFFIDARE alla Ditta Marchi Pietro, con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), Loc. Paradiso n.44, l’esecuzione dei lavori di variante e suppletiva per l’importo di €. 3.321,89 (Iva esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale senza proroga dei termini contrattuali;
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 3.720,52 al Cap. 2898 con voce "Efficientamento energetico impianti sportivi cap entrata 794/00 contrib ministero",  Imp. 2020/253, gestione competenza, come segue:
-€.3.654,08 in favore della Ditta Marchi Pietro, con sede in Castiglione di Garfagnana (LU), Loc. Paradiso n.44,
- €. 66,44 a titolo di incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 che sarà liquidato a seguito;

4. DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, all'Ufficio Ragioneria ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
5. DI DARE ATTO altresì che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
•	pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto daii'art. 1 c. 16 lett. B9 e c. 32 della legge n. 190/2012;
•	pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lett. B) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dell'Ente;
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.

	A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Ferrari Riccardo.

	La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2001.
  		
	                                                   IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
		   (Geom. Riccardo Ferrari)      
	                                                                               (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)3
15686